ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г. N 2166

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2009 - 2017 ГОДЫ

(с изм., внесенными Постановлением
Главы администрации г. Пензы
от 31.12.2008 N 2275 (ред. 14.04.2009))

Внесено: А.В. Агафиловым, начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Главы администрации г. Пензы N 1451 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы" издано 30.11.2007, а не 30.10.2007.

В соответствии с Постановлением Главы администрации города от 30.10.2007 N 1451 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы" и руководствуясь ст. 31 Устава города Пензы, постановляю:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009 - 2017 годы" согласно приложению.
2. Финансовому управлению города Пензы (О.В. Завьялкина) при формировании бюджета города на 2009 год предусмотреть финансирование целевой программы "По реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009 - 2017 годы", исходя из возможностей бюджета города Пензы.
3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с 1 января 2009 года.
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Пензы (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Е.В. Рыжова, заместителя Главы администрации В.В. Стоянова, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы (А.В. Агафилова).

И.о. Главы администрации города
Л.Б.КИПУРОВА

Приложение
к Постановлению
Главы администрации
от 18 декабря 2008 г. N 2166

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2009 - 2017 ГГ."

(с изм., внесенными Постановлением
Главы администрации г. Пензы
от 31.12.2008 N 2275 (ред. 14.04.2009))

Паспорт Программы

Наименование  	Долгосрочная целевая Программа "Реконструкция и развитие  
системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009 -     
2017 годы"                                                	
Заказчики     	Администрация города Пензы,                               
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы   	
Разработчик   	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы   	
Исполнители   	МУ "Управление капитального строительства города Пензы",  
иные организации, определенные в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении   
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание   
услуг для государственных и муниципальных нужд"           	
Цели и задачи 
Программы     	Целями Программы являются:                                
- развитие системы ливневой канализации в городе Пензе и  
устранение к 2017 году дефицита мощности по водоотведению 
ливневых стоков в городе Пензе;                           
- обеспечение комфортного проживания жителей города Пензы;
- увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление  
материально-технической базы, своевременный ремонт и      
развитие сети ливневой канализации города Пензы.          
Задачами Программы являются:                              
- приведение обветшавших сетей в нормативное состояние;   
- строительство новых и реконструкция имеющихся сетей     
ливневой канализации;                                     
- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих     
должное качество работ по строительству, ремонту и        
содержанию объектов ливневой канализации и снижение их    
стоимости;                                                
- дальнейшее совершенствование учета (паспортизация,      
инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание   
единого банка данных по техническому состоянию объектов   
ливневой канализации;                                     
- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты;
- улучшение экологической обстановки в городе Пензе;      
- 115 км сетей ливневой канализации будет построено вновь;
- 50 км сетей ливневой канализации будет реконструировано;
- более 20 очистных сооружений будет построено вновь      	
Основные      
целевые       
индикаторы    	1. Разработка проектно-сметной документации для реализации
мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой  
канализации в городе Пензе 286 млн. рублей, в том числе:  
2009 год - 20,0 млн. рублей;                              
2010 год - 100,0 млн. рублей;                             
2011 год - 20,0 млн. рублей;                              
2012 год - 20,0 млн. рублей;                              
2013 год - 23,0 млн. рублей;                              
2014 год - 23,0 млн. рублей;                              
2015 год - 26,0 млн. рублей;                              
2016 год - 54,0 млн. рублей.                              
2. Выполнение работ по реконструкции существующих         
инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции    
сетей ЛК и очистных сооружений в соответствии с проектом  
8584 млн. рублей, в том числе:                            
- 2010 год 411,0 млн. рублей;                             
- 2011 год 223,0 млн. рублей;                             
- 2012 год 1000,0 млн. рублей;                            
- 2013 год 1000,0 млн. рублей;                            
- 2014 год 1100,0 млн. рублей;                            
- 2015 год 1100,0 млн. рублей;                            
- 2016 год 1200,0 млн. рублей;                            
- 2017 год 2550,0 млн. рублей.                            
3. Строительство сетей ливневой канализации 115 км к 2017 
году, в том числе:                                        
2010 год - 5,7 км;                                        
2011 год - 10.0 км;                                       
2012 год - 15,0 км;                                       
2013 год - 15,0 км;                                       
2014 год - 15,0 км;                                       
2015 год - 15,0 км;                                       
2016 год - 15,0 км;                                       
2017 год - 24,3 км.                                       
4. Строительство очистных сооружений 20 ед. к 2017 году, в
том числе:                                                
2010 год - 3 ед;                                          
2011 год - 4 ед;                                          
2012 год - 3 ед;                                          
2013 год - 3 ед;                                          
2014 год - 3 ед;                                          
2015 год - 3 ед;                                          
2016 год - 1 ед;                                          
5. Реконструкция сетей ливневой канализации 50 км к 2017  
году, в том числе:                                        
2010 год - 2,6 км;                                        
2011 год - 10,0 км;                                       
2012 год - 8,0 км;                                        
2012 год - 8,0 км;                                        
2013 год - 7,0 км;                                        
2014 год - 7,0 км;                                        
2015 год - 7,0 км;                                        
2016 год - 0,4 км                                         	
Сроки и этапы 
реализации    	2009 - 2017 годы:                                         
1 этап 2009 - 2011 годы;                                  
2 этап 2012 - 2017 годы                                   	
Объемы и      
источники     
финансирования	Общий объем финансирования Программы из бюджета города    
Пензы составляет 8870,0 млн. руб., в том числе:           
1 этап (2009 - 2011 гг.) - 774,0 млн. руб.                
2 этап (2012 - 2017 гг.) - 8096,0 млн. руб.               
Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и  
распределение денежных средств по годам ежегодно подлежит 
корректировке в соответствии с лимитами бюджетного        
финансирования, уточнением стоимости запланированных      
мероприятий согласно проектно-сметной документации        	
Основные      
ожидаемые     
конечные      
результаты    	- улучшение качества коммунального обслуживания и         
повышение комфортности проживания граждан;                
- приведение системы ливневой канализации города Пензы в  
нормативное состояние;                                    
- 115 км сетей ливневой канализации будет построено вновь;
- 50 км сетей ливневой канализации будет реконструировано;
- более 20 очистных сооружений будет построено вновь;     
- снижение эксплуатационных расходов на содержание        
улично-дорожной сети;                                     
- увеличение межремонтных сроков улично-дорожной сети;    
- устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых  
стоков в городе Пензе;                                    
- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты 	
Организация   
управления    
Программой и  
контроль над  
ходом ее      
реализации    	Контроль осуществляется Администрацией города Пензы,      
Финансовым управлением города Пензы (контроль за целевым  
использованием денежных средств).                         
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы   
координирует действия исполнителей Программы - МУ         
"Управление капитального строительства города Пензы", иных
организаций, определенных в порядке, предусмотренном      
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении   
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание   
услуг для государственных и муниципальных нужд".          
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы   
готовит ежегодный отчет о ходе выполнения программных     
мероприятий                                               	

Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009 - 2017 годы" (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с реконструкцией и развитием системы ливневой канализации в городе Пензе.
Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на эффективное и надежное водоотведение ливневых стоков с городских дорог, приведение системы ливневой канализации города Пензы в нормативное состояние, устранение к 2017 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2009 по 2017 годы.
В настоящее время в городе Пензе эксплуатируется более 180 км сетей ливневой канализации, более 50 км которых по состоянию на 01.01.2008 имеют уровень износа 75% и требуют реконструкции. Кроме того, нет очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов в р. Суру. На основании схемы развития сетей ливневой канализации города необходимо построить 20 очистных сооружений согласно бассейнов, на которые разделена территория города согласно вертикальным отметкам.
Существующая система ливневой канализации не в полном объеме осуществляет водосбор с проезжей части дорог города, а на некоторых дорогах совсем отсутствует, что влечет разрушение асфальтобетонного покрытия раньше нормативного срока.
Для приведения всей системы ливневой канализации в нормативное состояние необходимо построить вновь более 115 км сетей.
Учитывая актуальность реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы ливневой канализации в городе Пензе, а также значительную стоимость запланированных работ, возникает необходимость комплексного решения данных вопросов с привлечением кредитных средств.
На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет. Поэтому возникает необходимость решения поставленных задач программно-целевым методом.
Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:
- инфляционные процессы;
- изменение стоимости программных мероприятий;
- несчастные случаи при выполнении программных мероприятий;
- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.);
- непредвиденный выход из строя оборудования.
Для предотвращения возможных рисков необходимо:
- учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия;
- корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению товара и услуг на текущий программный год;
- при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности;
- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

2. Цели и задачи Программы

Реализация программных мероприятий рассчитана на весь период действия Программы с 2009 года по 2017 год включительно.
Целями Программы, которые будут достигнуты к 2017 году, являются:
развитие системы ливневой канализации в городе Пензе и устранение к 2017 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе, обеспечение комфортного проживания населения, увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально-технической базы, своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы. Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи Программы:
- приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;
- строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;
- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;
- дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации;
- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты;
- улучшение экологической обстановки в городе Пензе;
- 115 км сетей ливневой канализации будет построено вновь;
- 50 км сетей ливневой канализации будет реконструировано;
- более 20 очистных сооружений будет построено вновь.

3. Сроки и этапы реализации

Мероприятия Программы будут реализованы в 2009 - 2017 годах, в том числе:
1 этап (2009 - 2011 гг.)
2 этап (2012 - 2017 гг.)

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование

Финансирование Программы будет осуществляться за счет ассигнований из бюджета города Пензы на сумму 8870,0 тыс. рублей, в том числе:
1 этап 774,0 млн. рублей;
2 этап 8096 млн. рублей.
Расчет финансовых потребностей произведен согласно действующим ценам на товары и услуги, предусмотренные программными мероприятиями, на момент их составления, с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции.
Исполнение программных мероприятий предусмотрено с 2009 года по 2017 год.
Организационное и кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей Программы. Дополнительное техническое обеспечение не требуется.
Исполнителями программных мероприятий являются организации, с которыми на основании проведенных конкурсов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" МУ "Управление капитального строительства города Пензы" заключает договоры (контракты) на выполнение проектных работ, предусмотренных данной Программой. Управление ЖКХ города Пензы заключает договоры (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой. Исполнители (победители конкурса муниципального заказа) осуществляют исполнение программных мероприятий.
В целом реализация Программы приведет к улучшению условий проживания жителей города Пензы и улучшению качества коммунального обслуживания.

5. Перечень программных мероприятий

Программой предусмотрено проведение следующих работ:

┌─────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Наименование мероприятий │  Исполнители  │     Сроки     │    Объемы     │
│                         │               │  выполнения   │финансирования,│
│                         │               │  программных  │  млн. рублей  │
│                         │               │  мероприятий  │               │
├─────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤

    Действие пункта приостановлено частично в сумме 20000,0 тыс. рублей
на  период  с  1  января  по  31 декабря 2009 года Постановлением Главы
администрации г. Пензы от 31.12.2008 N 2275 (ред. 14.04.2009).

│1. Разработка            │Управление     │2009 г.        │     20,0      │
│проектно-сметной         │жилищно-       │               │               │
│документации для         │коммунального  │               │               │
│реализации первоочередных│хозяйства      │               │               │
│мероприятий по           │города Пензы   │               │               │
│реконструкции и развитию │               │               │               │
│системы ливневой         │               │               │               │
│канализации в городе     │               │               │               │
│Пензе                    │               │               │               │
├─────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│2. Разработка и          │МУ "Управление │2010 г.        │     100,0     │
│утверждение проекта по   │капитального   │               │               │
│реконструкции и развитию │строительства  │               │               │
│системы ливневой         │города Пензы"  │               │               │
│канализации в городе     │               │               │               │
│Пензе на 2009 - 2017 гг. │               │               │               │
├─────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│3. Выполнение            │Организации, с │2010 - 2011 гг.│     634,0     │
│первоочередных           │которыми на    │               │               │
│мероприятий по           │основании      │               │               │
│реконструкции и развитию │проведенных    │               │               │
│системы ливневой         │конкурсов в    │               │               │
│канализации в городе     │соответствии с │               │               │
│Пензе                    │Федеральным    │               │               │
│                         │законом от     │               │               │
│                         │21.07.2005     │               │               │
│                         │N 94-ФЗ "О     │               │               │
│                         │размещении     │               │               │
│                         │заказов на     │               │               │
│                         │поставки       │               │               │
│                         │товаров,       │               │               │
│                         │выполнение     │               │               │
│                         │работ, оказание│               │               │
│                         │услуг для      │               │               │
│                         │государственных│               │               │
│                         │и муниципальных│               │               │
│                         │нужд"          │               │               │
├─────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│4. Разработка            │МУ "Управление │2011 - 2016 гг.│     166,0     │
│проектно-сметной         │капитального   │               │               │
│документации и рабочих   │строительства  │               │               │
│чертежей для реализации  │города Пензы"  │               │               │
│мероприятий по           │               │               │               │
│реконструкции и развитию │               │               │               │
│системы ливневой         │               │               │               │
│канализации в городе     │               │               │               │
│Пензе, в рамках          │               │               │               │
│утвержденного проекта    │               │               │               │
├─────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│5. Выполнение работ по   │Организации, с │2012 - 2017 гг.│    7950,0     │
│реконструкции            │которыми на    │               │               │
│существующих инженерных  │основании      │               │               │
│коммуникаций,            │проведенных    │               │               │
│строительству и          │конкурсов в    │               │               │
│реконструкции сетей      │соответствии с │               │               │
│ливневой канализации и   │Федеральным    │               │               │
│очистных сооружений в    │законом от     │               │               │
│соответствии с проектом  │21.07.2005     │               │               │
│                         │N 94-ФЗ "О     │               │               │
│                         │размещении     │               │               │
│                         │заказов на     │               │               │
│                         │поставки       │               │               │
│                         │товаров,       │               │               │
│                         │выполнение     │               │               │
│                         │работ, оказание│               │               │
│                         │услуг для      │               │               │
│                         │государственных│               │               │
│                         │и муниципальных│               │               │
│                         │нужд"          │               │               │
├─────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│                         │               │Итого          │    8870,0     │
└─────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

1 этап (2009 - 2011 гг.):
- Разработка проектно-сметной документации для реализации первоочередных мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009 год.
- Разработка и утверждение проекта по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009 - 2017 гг.
- Выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе;
- Реконструкция существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства;
- Строительство новых сетей ЛК общей протяженностью 15,7 км;
- Реконструкция существующих сетей ЛК общей протяженностью более 2,6 км;
- Строительство 7 локальных и центральных очистных сооружений;
- Разработка проектно-сметной документации и рабочих чертежей для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2012 год в рамках утвержденного проекта.
2 этап (2012 - 2017 гг.):
- Разработка проектно-сметной документации и рабочих чертежей для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на соответствующий год в рамках утвержденного проекта;
- Реконструкция существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства;
- Строительство новых сетей ЛК общей протяженностью более 100 км;
- Реконструкция существующих сетей ЛК общей протяженностью около 50 км;
- Строительство 15 локальных и центральных очистных сооружений;
- Строительство магистрального городского коллектора общей протяженностью около 32 км;
- др. работы.
Объемы и стоимость работ подлежит корректировке после завершения предпроектных и проектных работ.
Выполнение предпроектных работ, а также работ по проектированию системы ливневой канализации в городе Пензе, реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ливневой канализации и очистных сооружений производится организациями, определяемыми по результатам размещения муниципального заказа путем проведения открытого конкурса, проводимого МУ "УКС города Пензы".
В результате исполнения программных мероприятий к 2017 году будут достигнуты следующие результаты:
- улучшение качества коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания граждан;
- приведение системы ливневой канализации города Пензы в нормативное состояние;
- 115 км сетей ливневой канализации будет построено вновь;
- 50 км сетей ливневой канализации будет реконструировано;
- более 20 очистных сооружений будет построено вновь;
- снижение эксплуатационных расходов на содержание улично-дорожной сети;
- увеличение межремонтных сроков улично-дорожной сети;
- устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе;
- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

6. Сведения о распределении объемов финансирования

Финансирование мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009 - 2017 гг. предполагается за счет кредитных средств финансовой организации путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона в соответствии с положением Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд с погашением кредита из бюджета города Пензы в соответствии с соглашением о финансировании.
Расчет финансовых потребностей по Программе показан в таблице 1.

Таблица 1.

Расчет финансовых потребностей по Программе, млн. руб. <*>        	
Этапы 
реали-
зации 	Мероприятия Программы     	Стоимость 
мероприятий
Программы 
по годам, 
млн. руб. 	Сроки   
реализации 
мероприятий
Программы 	Общая   
стоимость 
мероприятий
Программы 
по этапам, 
млн. руб. 	
1 этап	Разработка проектно-сметной   
документации для реализации   
первоочередных мероприятий по 
реконструкции и развитию      
системы ливневой канализации в
городе Пензе                  	20,0    	2009 г.  	774,0   	
	Разработка и утверждение      
проекта по реконструкции и    
развитию системы ливневой     
канализации в городе Пензе на 
2009 - 2017 гг.               	100,0   	2010 г.  		
	Выполнение первоочередных     
мероприятий по реконструкции и
развитию системы ливневой     
канализации в городе Пензе    	188,0   	2010 г.  		
		223,0   	2010 г.  		
		223,0   	2011 г.  		
	Разработка проектно-сметной   
документации и рабочих        
чертежей для реализации       
мероприятий по реконструкции и
развитию системы ливневой     
канализации в городе Пензе на 
2012 год в рамках             
утвержденного проекта         	20,0    	2011 г.  		
2 этап	Выполнение работ по           
реконструкции существующих    
инженерных коммуникаций,      
строительству и реконструкции 
сетей ЛК и очистных сооружений
в соответствии с проектом     	1000,0   	2012 г.  	8096,0   	
	Разработка проектно-сметной   
документации и рабочих        
чертежей для реализации       
мероприятий по реконструкции и
развитию системы ливневой     
канализации в городе Пензе на 
2013 год в рамках             
утвержденного проекта         	20,0    			
	Выполнение работ по           
реконструкции существующих    
инженерных коммуникаций,      
строительству и реконструкции 
сетей ЛК и очистных сооружений
в соответствии с проектом     	1000,0   	2013 г.  		
	Разработка проектно-сметной   
документации и рабочих        
чертежей для реализации       
мероприятий по реконструкции и
развитию системы ливневой     
канализации в городе Пензе на 
2014 год в рамках             
утвержденного проекта         	23,0    			
	Выполнение работ по           
реконструкции существующих    
инженерных коммуникаций,      
строительству и реконструкции 
сетей ЛК и очистных сооружений
в соответствии с проектом     	1100,0   	2014 г.  		
	Разработка проектно-сметной   
документации и рабочих        
чертежей для реализации       
мероприятий по реконструкции и
развитию системы ливневой     
канализации в городе Пензе на 
2015 год в рамках             
утвержденного проекта         	23,0    			
	Выполнение работ по           
реконструкции существующих    
инженерных коммуникаций,      
строительству и реконструкции 
сетей ЛК и очистных сооружений
в соответствии с проектом     	1100,0   	2015 г.  		
	Разработка проектно-сметной   
документации и рабочих        
чертежей для реализации       
мероприятий по реконструкции и
развитию системы ливневой     
канализации в городе Пензе на 
2016 год в рамках             
утвержденного проекта         	26,0    			
	Выполнение работ по           
реконструкции существующих    
инженерных коммуникаций,      
строительству и реконструкции 
сетей ЛК и очистных сооружений
в соответствии с проектом     	1200,0   	2016 г.  		
	Разработка проектно-сметной   
документации и рабочих        
чертежей для реализации       
мероприятий по реконструкции и
развитию системы ливневой     
канализации в городе Пензе на 
2017 год в рамках             
утвержденного проекта         	54,0    			
	Выполнение работ по           
реконструкции существующих    
инженерных коммуникаций,      
строительству и реконструкции 
сетей ЛК и очистных сооружений
в соответствии с проектом     	2550,0   	2017 г.  		
	ИТОГО:                        	8870,0   			

--------------------------------
<*> - Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодной корректировке после завершения предпроектных и проектных работ исходя из возможностей бюджета города Пензы.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- улучшение качества коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания граждан;
- приведение системы ливневой канализации города Пензы в нормативное состояние;
- 115 км сетей ливневой канализации будет построено вновь;
- 50 км сетей ливневой канализации будет реконструировано;
- более 20 очистных сооружений будет построено вновь;
- снижение эксплуатационных расходов на содержание улично-дорожной сети;
- увеличение межремонтных сроков улично-дорожной сети;
- устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе;
- сократится сброс загрязняющих веществ в водные объекты.

8. Система целевых индикаторов и методика
оценки эффективности

Исходя из основных целей и задач Программы, можно выделить следующие показатели, характеризующие эффективность данной Программы:

Наименование    
целевого индикатора 	Базовое  
значение 
индикатора	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Значение 
индикатора
на момент 
завершения
Программы 	
1. Разработка       
проектно-сметной    
документации для    
реализации          
первоочередных      
мероприятий по      
реконструкции и     
развитию системы    
ливневой канализации
в городе Пензе, млн.
рублей              		20,0  	100,0 	20,0  	20,0  	23,0  	23,0  	26,0  	54,0  		286,0   	
2. Выполнение работ 
по реконструкции    
существующих        
инженерных          
коммуникаций,       
строительству и     
реконструкции сетей 
ЛК и очистных       
сооружений в        
соответствии с      
проектом, млн.      
рублей              			411,0 	223,0 	1000,0 	1000,0 	1100,0 	1100,0 	1200,0 	2550,0 	8584,0  	
3. Строительство    
сетей ливневой      
канализации, км     			5,7  	10,0  	15,0  	15,0  	15,0  	15,0  	15,0  	24,3  	115,0   	
4. Строительство    
очистных сооружений,
ед.                 			3   	4   	3   	3   	3   	3   	1   		20    	
5. Реконструкция    
сетей ливневой      
канализации, км     			2,6  	10,0  	8,0  	8,0  	7,0  	7,0  	7,0  	0,4  	50,0   	

При оценке индикатора 1 Программа считается выполненной (за отчетный год, за период реализации Программы), если оценочная эффективность реализации Программы выполнена не менее чем на 95 процентов показателей и индикаторов Программы.
Для оценки 2-го индикатора эффективности реализации Программы, кроме освоения денежных средств, необходимо указывать выполнение программных мероприятий в физических величинах.
Оценка индикаторов 3, 4, 5 осуществляется по факту выполнения программных мероприятий за отчетный период.
Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Администрацией города Пензы. В ходе реализации Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей Программы - МУ "Управление капитального строительства города Пензы", иные организации, определенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы готовит ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий согласно установленным формам.

Форма N 1

Оценка основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы "Реконструкция и развитие
системы ливневой канализации в городе Пензе
на 2009 - 2017 годы" на ______ год

Наименование показателя   	Единица  
измерения 	Базовое 
значение 	План 	Факт 	Отклонение	
1. Разработка               
проектно-сметной            
документации для реализации 
первоочередных мероприятий  
по реконструкции и развитию 
системы ливневой канализации
в городе Пензе, млн. рублей 						
2. Выполнение работ по      
реконструкции существующих  
инженерных коммуникаций,    
строительству и             
реконструкции сетей ЛК и    
очистных сооружений в       
соответствии с проектом,    
млн. рублей                 						
3. Строительство сетей      
ливневой канализации, км    						
4. Строительство очистных   
сооружений, ед.             						
5. Реконструкция сетей      
ливневой канализации, км    						

Форма N 2

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы
"Реконструкция и развитие системы ливневой канализации
в городе Пензе на 2009 - 2017 годы" на _______ год

Вывод об эффективности    
Программы          	Итоговая сводная
оценка (баллов) 	Обоснование  
причин    
положительной/
отрицательной 
динамики   
эффективности 	Предложения
по     
дальнейшей 
реализации 
целевой  
программы 	
Эффективность выросла        	Положительное   
значение        			
Эффективность на уровне      	0               			
Эффективность снизилась      	Отрицательное   
значение        			

9. Организация управления Программой и контроль
над ходом ее реализации

Контроль осуществляется Администрацией города Пензы, Финансовым управлением города Пензы (контроль за целевым использованием денежных средств).
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы ежегодно, до 1 марта, направляет в отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчеты о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств и координирует действия исполнителей Программы - МУ "Управление капитального строительства города Пензы", иные организации, определенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Заместитель
Главы администрации
А.В.МАКАРОВ